준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 시 명 : 북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충(전기공사)

나. 도 급 자 : 제일전기건설공사 외1  대표 : 이상열

다. 도 급 액 : 금96,137,565원

라. 계약일자 : 2015. 09. 11.

마. 착수일자 : 2015. 09. 14.

바. 준공기한 : 2015. 12. 22.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2016. 03 .15.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 선행공사인 건축공사 준공연기 함에 따라 후행공사인 전기공사 절대 부족으로 공사기간 연장하고자 함.

2015. 11.

확인자 : 시설과장  김한준 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소분임경리관 귀하