준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 족구장 조명시설 설치공사

나. 공사개요

- 족구장 내 조명시설(조명탑 2곳, 분전반1개)설치

다. 도급업체 : ㈜새론씨앤이 (대표 이천재)

라. 공사금액 : 금10,167,260원

마. 공사기간 : 2015. 6. 15. ~ 7. 30.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공일자 : 당초 2015. 7. 30. → 변경 2015. 8. 21.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲관리사무소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- “북서울꿈의숲 족구장 조성사업”공사진행 중 이용시민 요구사항 등을  반영하는 과정에서 관급자재 물량 변경 등이 발생하여 관급자재 납품 기간이 변동됨에 따라 본 공사 준공기간이 연장되었으며,

- 본 공사 준공기간 연장에 따라 부대공사(북서울꿈의숲 족구장 조명시설 설치공사)를 준공기간내에 준공이 어려워 준공기간을 연기하고자 함.

2015. 07. 27.

작성자 : 지방전기운영주사보 7 급  박 도 복 (인)

확인자 : 북서울꿈의숲관리사무소장  김 상 근 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 재무관 귀하