준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

○ 용  역  명 : 2018년 빗물마을 조성사업 기본 및 실시설계 용역

○ 계  약  자 : (주)서우티이씨

○ 계 약 금 액 : 금74,254,000원

○ 계약년월일 : 2018. 04. 13.

○ 착수년월일 : 2018. 04. 17.

○ 준공예정일 : 2018. 08. 22.

2. 보고내용

○ 준공기한 연기

- (당초) '18. 08. 22 ⇒ (변경) '18. 09. 05

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 제7회 전국동시지방선거와 관련 선거일전 60일부터 선거일까지(4.14~6.13) 공청회, 위크숍 등 제한행위로 주민 위크숍이 연장되어 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

2018. 08.

물순환책과장 한유석(인)

서울특별시경리관 귀하