준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2015 광암아리수 정수센터 정수지(1~4지)밸브 교체 전기공사

나. 공사개요

- 전력간선 공사 :  전원케이블 설치(F-CV 4C×50㎟ × 197m)

- 동력설비공사

· 전동밸브 MCC 판넬 설치 : 700Wx2100Hx600D (SUS2.0t) × 1면

· AL 케이블트레이 설치 : 96m

· 전원케이블 설치 : 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ × 1,885m

· 파상형 폴리에틸렌 전선관 설치 : ELP30mm × 1,575m

· 접지케이블 설치 : 2.5㎟ × 1,371m

- 기타 부대공사 1식

다. 도급업체 : ㈜ 광명전기 대표 전미경

라. 공사금액 : 금83,816,190원

마. 공사기간 : 2015. 6. 5 ~ 7. 24

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공일자 : 당초 2015. 7. 24. → 변경 2015. 10. 11

나. 연기사유 귀책소재 : 광암아리수 정수센터 정수시설과

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 선행공정(1~2지 밸브설치)이 진행중임에 따라 정수지 밸브교체 전기공사의 준공기간을 밸브설치공사 공정에 맞춰 준공기간을 연기하여 정수지 교체밸브 공사에 만전을 기하고자 함

2015. 07. 23.

작성자 : 정수시설과 공업7급  박 희 준 (인)

확인자 : 정수시설과장         김 창 현 (인)