준공기한 조정의뢰서

1. 공사현황

가.공 사 명 : 서울지하철 9호선2단계 917공구 건설공사(8차)

나.도 급 자 : GS건설(주) 외 2개사   대표 함 인 선

다.공사현황

구 분	도 급 비(천원)	계약년월일	착수년월일	준공기한	비고
총 괄	113,194,000	‘08. 05. 30	‘08. 06. 02	‘14. 02. 01
5 차	21,436,000	‘12. 03. 05	‘12. 03. 06	‘13. 01. 20

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 조정하여 주시기 바랍니다.

가.준공기한 조정현황

구 분	당 초		변 경		비 고
	도급비(천원)	준 공 기 한	도 급 비	준 공 기 한
총 괄	113,194,000	‘14. 02. 01	변경없음	변경없음
5 차	21,436,000	‘13. 01. 20	21,436,000	‘13. 02. 21

나.귀책소재 : 서울시도시기반시설본부

다.지체상금부과여부 : 미부과

라.준공기한 조정사유

- 8차공사에 반영된 환승통로 동선변경을 위한 설계변경 진행중이며

- 기존 지하철2호선 하부 작업효율 저하로 준공기한을 연장 시행.

2013.  01.

확인자 : 도시철도토목부장  우 남 직(인)

서울특별시 도시기반시설본부경리관 귀하