준공기한 연기 의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 소규모 생물서식공간 조성

○ 위    치 : 산림욕장내 아까시아숲 등 2개소

○ 사업내용 : 생태연못조성, 관찰데크, 초화류 및 수생식물식재 등

○ 사업기간(당초) : 2014.10.17 ~ 2014.12.02.

○ 도 급 자 : ㈜장위건설 대표 유용수

○ 도 급 액 : 금135,086천원

2. 준공기한 변경사항

○ 당  초  : 2014. 12. 02.

○ 변  경  : 2014. 12. 21.(20일 연장)

3. 준공기한 연기사유

○ 공원 특성상 공휴일 공사중단(공사차량 및 자재반입 제한 등)과 산악지형에 따른 자재운반(조경석 등) 시일소요 등으로 절대공기가 부족한 상태이므로 공사품질 확보를 위하여 부득이 준공기한을 연기코자 함.

4. 귀책사유 : 서울대공원

5. 조치사항

○ 위와 같이 준공기한을 연기하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.