준공기한 연기의뢰서

1. 공사내용

가. 공 사 명 : 담비 스라소니 전시장 조성공사

나. 도 급 자 : ㈜매일 대표 조현철

다. 도 급 액 : 금367,790,500원

라.  계약기간 : 2013.4.16. ~ 2014.4.20.

마. 계 약 일 : 2013.4.16.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014.4.30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울대공원

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 대공원 간부 합동순찰시(4.14) 지시사항 보완에 따른 설계변경과 그에 따른 공기 확보

☞ 담비, 스라소니 전시장 숲 조성을 위한 식재 보완 : 동물기획과-(메모보고, 2014.4.15.)

- 인접 동물사 및 주관람동선 포장 미실시에 따른 스라소니 관람대 포장 마감 높이 결정 지연에 따른 공기 부족

2014 년   4 월      일

조경과장     이 성 주 (인)

서울대공원(분임)경리관 귀하