준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 월영지 주변 팔각휀스 설치 공사

나. 공사개요

- 팔각휀스 2단 156m, 1단 120m, 점토블럭걷기 450㎡

다. 도급업체 : ㈜네이쳐드림 대표 강창원

라. 공사금액 : 금12,523,500원

마. 공사기간 : 2015. 6. 3. ~ 7. 11.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공일자 : 당초 2015. 7. 11. → 변경 2015. 7. 22.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲관리사무소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 전망대 가는 길 점토블록포장 구간 블록 걷기 후 황토포장 포설이 완료됨에 따라 되메우기 등 잔여공정이 남아 공기를 연장하여 공사현장 관리에 만전을 기하고자 함

2015. 07. 10.

작성자 : 북서울꿈의숲관리사무소 녹지7급  황 서 현 (인)

확인자 : 북서울꿈의숲관리사무소장         김 상 근 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 재무관 귀하