준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 시 명 : 중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

나. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

다. 도 급 액 : 금749,384,000원

라. 계약일자 : 2015. 4. 20

마. 착수일자 : 2015. 4. 20

바. 준공기한 : 2015. 8. 17

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2015. 10. 16.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 상징관문, 장비보관 및 운영자 대기실, 체험시설 주변 휀스 설치 등 추가공사에 소요되는 기간에 대해 연기함

2015. 08.

확인자 : 시설과장  김한준 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소분임경리관 귀하