준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 시 명 : 낙산배드민턴장 이전공사

나. 도 급 자 : 형진랜드㈜  대표 유진숙

다. 도 급 액 : 금12,000,000원

라. 계약일자 : 2015. 8. 24.

마. 착수일자 : 2015. 8. 24.

바. 준공기한 : 2015. 9. 12.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2015. 12. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 배드민턴장 설치예정지 인접한 낙산어린이집 원장 및 학부모, 인근주민 등이 공사철회 요청 민원 제기하여 공사 일시 중단됨

2015. 09.

확인자 : 시설과장  김윤철 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소분임경리관 귀하