준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 천호공원 시설물(배드민턴장 등) 정비공사 실시설계 용역

나. 용 역 사 : 새암조경(주)  대표 류제진

다. 계약금액 : 금일천일백칠십칠만사천원(금11,774,000원)

라. 계 약 일 : 2019. 03. 04.

마. 준공기한 : 2019. 05. 02.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

- 당 초 : 2019. 03. 04. ~ 2019. 05. 02.

- 변 경 : 2019. 03. 04. ~ 2019. 05. 22.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 총사업비(설계비 포함)가 330,000천원이나 설계 결과 580,000천원으로 산정되어 추가 예산 반영에 따른 서울시 공원녹지정책과 협의 필요

- 그에 따른 계약심사 절차 진행 등의 시간이 지연되어 설계용역의 절대공기 부족

2019.  4.    .

동부공원녹지사업소 시설과장   진  병  규 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하