보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
문서번호	공사감독2처-12117
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.09.23.
공개여부	공개
제 목	준공기한연기 검토보고

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 거마가압장 ~ 거마배수지간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2016. 5. 3 ~ 2016. 9. 29.

다. 공 사 비 : 217,335,890원

라. 공사개요 : 관부설 D100~400mm, L=512m

마. 도 급 자 : (주)홍익설비 대표 강오영

바. 시 행 청 : 강동수도사업소(급수운영과)

Ⅱ		보고내용

『도급자가 제출한 준공기한 연기요청(HE2016-36, 2016.09.23)에 대한 검토보고임』

가. 공정 현황

1) 현재 공정 : 90%(2016년 9월 23일 현재)

2) 완료 사항 : 관부설 D400mm L=412m

3) 잔여 사항 : 관부설 D400mm L=15m, 분기 연결 작업 등

4) 추진 현황 :

- 2016. 5.  3 ~ 2016. 6. 10 : 설계도서 검토, 현장조사, 착공서류 검토, 확인굴착

- 2016. 6. 10 ~ 2016. 6. 30 : 관부설 및 밸브실 설치(야간공사)

- 2016. 7.  1 ~ 2016. 8. 18 : 야간 소음 민원으로 공사중지됨

- 2016. 8. 19 ~ 2016. 9.  6 : 야간공사를 주간공사로 변경 협의 및 완료

- 2016. 9.  7 ~ 2016. 9. 23 : 주간공사로 공사 진행중

나. 도급사 준공기한 연기요청 내용

1) 준공기한 연기 사유

- 야간공사 소음민원으로 공사 중지 : 49일

- 야간 → 주간공사로 변경 협의〔급수운영과-17387(2016.9.9)〕 : 8일

- 추가 작업 지시〔급수운영과-14393(2016.7.28)〕 : 7일

- 폭염으로 인한 공사 효율 저하 및 공사 중지 : 22일

2) 준공기한 연기 요청일

- 준공기한 연기 요청일수 : 총 86일(중복된 기간 포함)중 25일 반영 요청

- 당초 : 2016년 5월 3일   ~  2016년 9월 29일

- 변경 : 2016년 5월 3일   ~  2016년 10월 24일(증25일)

다. 검토의견

○ 야간공사중 소음민원으로 공사 중지 및 주간 작업으로 변경 협의, 추가작업지시 등의

사유로 절대 공사 기간이 부족하므로 공사 준공기한 연기가 타당함

라. 준공기한 연기 내용

1) 준공기한 연기 사유 : 절대공기 부족

2) 준공기한 연기 내용

- 당초 : 2016년 5월 3일 ~ 2016년 9월 29일

- 변경 : 2016년 5월 3일 ~ 2016년 10월 24일(증25일)

3) 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		행정사항

- 상기 사항에 대하여 발주청에 제출하여 준공기한 연기요청코자 함.

붙 임 : 1. 준공기한 연기원 1부.

2. 수정예정공정표 1부.

3. 준공기한연기요청 공문 1부.  끝.