준공기한 연기 의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2016년 서울대공원 등산로 정비공사

나. 도 급 자 : 포천시산림조합 대표 남궁 종

다. 계약금액 : 금170,643,390원(금일억칠천육십사만삼천삼백구십원)

라. 당초기간 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 5. 27

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 :  2016. 6. 16일까지

나. 연기사유 귀책소재 : 서울대공원

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 2016년 서울대공원 등산로 정비공사 시행 중 현장여건에 따른 추가 공정 발생 및 설계변경 준공서류 검토 등 설계변경에 따른 공사기간 연장 필요함.

2016년  05월   일

조 경 과 장     강 인 호 (인)

서울대공원(분임)재무관 귀하