문서번호	설비부-9569
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
협조

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기 ․ 통신 ․ 신호공사」

준공기한 연기 검토 보고

2014. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기 ․ 통신 ․ 신호공사」

준공기한 연기 검토 보고

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사」추진 중 감리단으로부터 전기 ․ 통신 ․ 신호공사의 준공기한 연기 요청이 있어 이를 검토하여 보고함.

1		사업 개요

구 분	전기공사	통신공사	신호공사
위 치	양천구 신정3동 735-5번지 일원(서부트럭터미널 앞)
공사기간	‘10.12.15 ~ ’14.08.29	‘10.11.29 ~ ’14.08.29	‘10.11.29 ~ ’14.08.29
공사금액	2,985,360 천원	795,281 천원	325,449 천원
시 공 사	(주)금호전력	(주)삼삼통신기술	(주)우남전설
감 리 사	(주)동일기술공사 외 1개사

2		검토 근거

2014.08.28 : 준공기한 연기원 제출(공사 → 감리단)

2014.08.28 : 감리단 준공기한 연기 검토 보고[서지(감)제14-416~8호]

3		연기 사유

선행공정(토목공사)의 준공기한 연기(2014.10.15)로 후속공정인 전기 ․ 통신 ․ 신호공사 진행이 불가능한 사유 발생

5		연기 현황

구 분		계약금액(원)	당 초	변 경	비 고
공사	전기 총차	2,985,360,000	‘10.12.15 ~ ’14.08.29	‘10.12.15 ~ ’14.10.15	47일 연기
	전기 3차수	2,418,360,000	‘12.07.19 ~ ’14.08.29	‘12.07.19 ~ ’14.10.15	“
	통신 총차	795,281,630	‘10.11.29 ~ ’14.08.29	‘10.11.29 ~ ’14.10.15	“
	통신 3차수	775,281,630	‘12.07.16 ~ ’14.08.29	‘12.07.16 ~ ’14.10.15	“
	신호 총차	325,449,000	‘10.11.29 ~ ’14.08.29	‘10.11.29 ~ ’14.10.15	“
	신호 3차수	267,520,000	‘12.07.17 ~ ’14.08.29	‘12.07.17 ~ ’14.10.15	“

6		조치 의견

주공사인 토목공사의 준공기한 연기(2014.10.15.)로 공사 및 인수인계 진행 등 여건이 조성되지 않아 발생한 불가피한 사항으로 감리단의 검토 보고와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

지체상금 부과여부 : 미부과

계약부서(재무과, 건설총괄부)에 준공기한 연기의뢰

따로 붙임 : 준공기한 연기 검토보고서 및 관련공문 2부. 끝.