준공기한 연기사유서

1. 준공기한 연기사유

1) 7구간(길동) 복조리시장 상인회 공사협의 처리기간에 14일 지연

: 6월16일 길동복조리시장 상인회 방문하여 상인회장, 총무, 매니저 및 사업소담당자,

공단감독, 계약업체와 상수도공사에 따른 공사일정에 대하여 회의를 함.

[회의결과] 영업피해 최소화를 위해 추석 이후 공사 진행 요청 하였으며, 10월10일

확인굴착 예정 이었으나, 시장상인회 공사일정 변경 요청하여 10월17일

확인굴착(야간) 함.

[현재상황] 야간공사 소음민원 발생되어 시장상인회 및 거주자(지역주민)와의 야간                    공사에 따른 협조가 필요함.

2) 2구간(암사동) 야간공사 소음민원 발생으로 인하여 공법변경(야간→주간)을 하였으며,        이에 따른 굴착허가변경 및 경찰서 협의로 12일 지연

: 10월12일 2구간 암사동 491-37~488-13번지간(D=300㎜, L=350m) 야간공사 중            소음민원 발생(강동구청, 강동경찰서, 다산콜센터, 당직실 접수)하여 야간공사              중지 하였음. 소음민원으로 야간공사에서 주간공사로 굴착허가변경 및 경찰서              도로공사신고 변경하여 공사진행 예정.(협의기간 10/13~10/24)

3) 4구간(상일동) 굴착구간 변경(보도→차도)에 따른 유관협의로 10일 지연                   : 4구간 상일동 473~458-4번지간(D=200㎜, L=240m)의 시점부 70m 관부설 완료           하였으나, 잔여 보도구간(상일동 471~458-4번지간, L=160m)이 지하매설물 과다로         (통신맨홀, 전기맨홀, 하수도맨홀 등) 인하여 관부설할 공간이 없어 잔여 구간에           대하여 보도에서 차도로 우회하여 굴착허가변경 요청중임.(10/24~현재 진행중)

4) 사업소에서 발주한 건설폐기물처리 용역계약이 지연되어 동 공사도 22일 지연

: 기존 건설폐기물처리용역업체(반출기한:7월22일까지)의 계약만료일과 신규 건설폐기

물처리용역(입찰공고:7월8일, 계약일자:8월30일, 첫 반출일자:9월8일)의 계약에 따른

폐기물 첫 반출날짜까지 48일 소요됨, 그 기간 중 동 공사로 발생된 건설폐기물을

창고부지까지 활용하면서 야적하고 공사를 진행(8월12일까지) 하였으나, 그 이상의

건설폐기물 야적이 불가하여 동 공사를 중지 하였음. 공사재개(9월5일-6구간)

(7/22~9/8 중 8/13~9/4, 총22일)

2. 연기 요청일수 : 총 46일 신청

3. 공사 기간 : - 당초 2016년 05월 09일 ~ 2016년 11월 04일

- 변경 2016년 05월 09일 ~ 2016년 12월 20일 (증46일)

2016년 10월  26일

주    소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 337, 502(대림동)

상    호 : 제이엘피건설(주)

대    표 : 김미경   (인)