제 목 :	준공기한 연기요청

고 천 건 설 (주)

서울 강서구 내발산동 678-4  4층 tel)2663-2111  fax) 373-2412

문서번호:2014-09-25	선결			지시
시행일자:2014-09-25	접수	일자시간		결재.공람
수 신:서울특별시시설관리공단 이사장		번호
참 조:공사감독2처장	협 의
제 목:준공기한 연기요청	담당자

1.서울특별시시설관리공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.서울시상수도사업본부와계약[2014년04월14일]체결,서울시시설관리공단에서감독중인“합정동433-1호외4개소 세척갱생관정비공사“건의 관련하여 준공기한 연기원을 붙임와 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

◇　준공기한 연기 요청일

-　당초：　２０１４.０４.１４　～２０１４.１０.１０

-　　변경：　２０１４.０４.１４　～　２０１４.１1. 10（31일）

＃붙임

1. 준공기한　연기원　  1부.

2. 연기　사유서     　1부.

３. 예정공정표　　　　１부．끝.

고 천 건 설(주)     윤 영 선 (인)

과장					팀장								공사감독2처장			09/25
시행	2014-09-25																접수		공사감독2처-15893									(		2014.09.25.			)