준공기한 연기원

공 사 명	합정동４３３-１호외 ４개소 세척갱생관 정비공사
계 약 금 액	일금 이억이천구백팔십삼만사천구백팔십원(\２２９,８３４,９８０)
계약 년월일	2014년 04월 １1일
착공 년월일	2014년 04월 １４일
준 공 기 한	2014년 １０월 １０일
위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 연기기한 : 2014년 11월 10일까지(추가 31일) 2. 연기사유 : 도로점용 허가지연으로 절대공기 부족 3. 지체상금 부과여부 : 미부과 4. 귀책소재 : 발주청 첨부 : 1. 연기사유서 1부. 2. 연기사유 증빙자료 1부. 끝. 2014년 09월 ２5일 주 소 : 서울시 강서구 강서로 ３１３ 회사명 : 고천건설（주） 대표자 : 윤영선 (인) 서울특별시 시설관리공단 이사장 귀하