준공기한 연기원(1차)

공 사 명	거마가압장～거마배수지간 송배수관 정비공사
계 약 금 액	일금 : 217,335,890원(금이억일천칠백삼십삼만오천팔백구십원정)
계약 년월일	2016년 04월 26일
착공 년월일	2016년 05월 03일
준 공 기 한	2016년 09월 29일
위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 연기기한 : 2016년 10월 24일까지(25일간) 2. 연기사유 1) 야간공사 중 소음민원으로 인한 공사 중지. : 49일 (2016. 07. 01 ∼ 2016. 08. 18) 2) 야간공사의 주간공사전환에 따른 할증 및 협의률조정 : 8일 3) 폭염으로 인한 공사중지 : 22일 4) 공사범위외 작업지시(급수운영과-14393)로 인한 공사 일수 : 7일 5) 현재 잔여공정률(약 5%)감안 25일 연기 요청 ※ 총공사일수 당초 150일 → 175일로 증가 ⇒ 연기 일수 25일 첨부 : 예정공정표(변경) 1부. 2016년 09월 23일 주 소 : 서울시 은평구 통일로 89길5,수연빌딩3층 회 사 명 : (주)홍익건설 대표이사 : 강 오 영 (인) 서울특별시 시설관리공단 이사장 귀하