보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					10/26
문서번호	공사감독2처-14362
보존기간	준영구		협 조	대리
결재일자	2016.10.26.
공개여부	공개
제 목	준공기한 연기원 검토보고

1. 공사현황

가. 공 사 명：암사동 501-3 ~ 496-26 외 8개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간：2016. 5. 9. ∼ 2016. 11. 4.

다. 도 급 비：474,686,170원

라. 공사개요 : D = 20 ~ 300mm, L=1,906m

마. 발 주 처：강동수도사업소(시설관리과)

바. 도 급 사：제이엘피건설(주)  대표 김미경

2. 보고내용

〖 상기 공사의 도급자가 제출한 “준공기한 연기원 제출건 『제이엘피2016-37

호(2016.10.26)』에 대한 검토 보고임 〗

가. 도급사 준공기한 연기 요청 사유

1) 건설 폐기물 처리 용역업체 계약지연으로 상수도공사 추진 지연 : 22일

• 기존 건설폐기물 처리 용역업체 반출기한 : 7. 22일

• 신규 건설폐기물 처리 용역업체 계약(8.30일)후 첫 반출일자 : 9.8일

• 위 기간중 중간 집하장을 이용하여 7.22~8.12 및 9.5일~9.8일은 작업시행

• 폐기물 반출이 불가하여 22일간(8월13일 ~ 9월4일) 공사추진 지연 됨

2) 2구간 야간공사를 주간공사로 작업시간 변경에 유관기간 추가 협의기간 소요 : 12일

• 10월12일 제2구간(암사동 491-37~488-13간) 야간공사 중 소음민원이 과다하게 발생하여 공사 중지하였으며

• 주간공사로 작업시간 변경

⇒ 공사시행 방법 변경지시[시설관리과-20996(2016.10.14.)호 관련

• 주간공사 굴착허가 및 경찰서 도로공사신고 변경을 위한 협의기간 12일(10월13일 ~ 10월24일) 소요

3) 4구간 상수관 부설위치 변경을 위한 유관기관 추가 협의기간 필요 : 10일

• 제4구간 일부구간(상일동471번지~458-4번지간, L=160m)은 보도로 상수관 부설토록 설계되었으나, 보도에 지하 시설물이 과다하여 차도로 상수관 부설위치 변경이 불가피함

• 굴착허가변경을 위한 협의기간 10일(10.24일 ~ 현재 진행중) 필요

4) 제7구간(길동 복조리시장 골목) 공사 추진을 위한 추가 협의기간 필요 : 14일

• 6월16일 발주청,공단 및 도급사가 길동복조리시장 상인회를 방문하여 상수도공사 안내 및 공사추진 일정 협의(영업손실 최소화를 위해 추석명절 이후에 공사진행요청한 상인회 의견 반영)후 10월17일 확인굴착 진행하였으나

• 야간공사 진행중 주택가 거주민으로부터 소음민원이 발생되어 현재 공사중지인 상태이며 공사추진을 위한 시장상인회 및 주택가 거주민에게 공사일정 추가협의 기간이 필요한 실정임.

나. 검토의견

1) 도급사가 제출한 준공기한 연기요청 사유 중 폐기물 처리 지연(22일)과 2구간 및 4구간의 유관기관 추가협의 기간(22일)은 타당하며,

2) 제7구간(복조리 시장)의 상인회 및 거주민에 대한 공사일정 협의는 타 구간 공사진행중 협의가 가능하므로 준공기한 연기일수에서 제외

3) 상기 사유로 인한 절대공기가 부족하므로 공사 준공기한 연기가 타당하다고 판단됨.

다. 준공기한 연기 내용

1) 준공기한 연기 사유 : 절대공기 부족

2) 준공기한 연기 내용

- 당초 : 2016년 5월 9일 ~ 2016년 11월 4일

- 변경 : 2016년 5월 9일 ~ 2016년 12월 18일(증 44일)

3) 지체상금 부과 여부 : 미부과

3. 조치계획

◌ 상기 검토사항을 발주청에 제출하고 조치결과에 따라 처리코자 함.

붙 임 : 관련서류 각 1부.  끝.