준공기한 연기원

공 사 명	암사동 501-3~496-26외 8개소 배급수관 정비공사
계 약 금 액	\474,686,170
계약년월일	2016년 04월 29일
착공년월일	2016년 05월 09일
준 공 기 한	2016년 11월 04일
위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 연기준공기한 : 2016년 12월 20일까지(추가 46일) 2. 연기사유 : 공기부족 첨부 : 1. 연기사유서 1부. 끝. 2016년 10월 26일 주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 337, 502(대림동) 회사명 : 제이엘피건설(주) 대표자 : 김 미 경 서울특별시 시설관리공단 이사장 귀하