준공기한 연기의뢰서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

나. 도 급 자 : 현대건설 외 2개사

다. 공사현황

구분	도급비(백만원)	준공기한	비고
총차분	106,559	2013. 05. 27 ~ 2019. 06. 30
5차분	26,143	2018. 02. 08 ~ 2019. 06. 30
6차분	8,305	2019. 03. 10 ~ 2019. 06. 30

2. 상기 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다

가. 준공기한 연기 현황(총차분)

구분	당초	변경	비 고
총차분	2013. 05. 27 ~ 2019. 06. 30	2013. 05. 27 ~ 2019. 12.15	증168일
5차분	2018. 02. 08 ~ 2019. 06. 30	변동없음
6차분	2019. 03. 10 ~ 2019. 06. 30	변동없음

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

다. 지연배상금 부과여부  : 미부과

라. 준공기한 연기사유

- 양천구 추가 요구사항인 카-리프트 설치 및 창의공원(반곡, 곰달래) 조성등에 따른 추가 공기 소요

2019.  06.   .

작성자 : 지방시설주사    이병환

확인자 : 방재시설부장    이임섭

서울특별시 (분임)경리관 귀하