준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명   : 광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

나. 계약업체   : ㈜서우티이씨(대표:강대신), 주식회사 청석전기이엔지(대표:박종수)

다. 계약금액   : 금132,464,000원

라. 계약년월일 : 2018. 11. 26.

마. 착수년월일 : 2018. 11. 28.

바. 준공기한   : 2019. 06. 25.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

┍ 당   초 : 2019. 06. 25.

┕ 변   경 : 2019. 09. 23.

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지연배상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 본 설계용역 추진과 관련 서울지방국토관리청 하천점용허가와 소규모환경영향평가 신청에 따른 업무협의, 설계보완 등의 추가 과업기간이 필요한 실정으로 설계용역 준공기한을 연장하고자 함

2019년  06월

생태환경과장  최 병 언 (인)

한강사업본부 (분임)재무관 귀하