준공기한 연기의뢰서

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 국회앞지하차도 보수공사

나. 공사기간 : 2019. 4. 16 ~ 2019. 10. 12

다. 도 급 비 : 466,103,800원

라. 계 약 자 : 석진건설(주) 대표 조성록, 이인희

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

○ 당  초 : 2019. 4. 16 ~ 2019. 10. 12

○ 변  경 : 2019. 4. 16 ~ 2019. 12. 06(55일 연기)

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 강서도로사업소(시설보수과)

다. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 관급자재 선정시험 기간소요 및 후속공종에 따른 절대공기 부족

2019.  9.

작성자 : 시설6급         강 연 홍 (인)

확인자 : 시설보수과장     박 병 연 (인)

서울특별시 경리관 귀하