준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 2017 모래내고가 보수공사

나. 계약업체 : 태강산업개발주식회사  대표 윤강문

다. 계약금액 : 1,513,000,000원

라. 계약년월일 : 2017. 08. 24

마. 착공년월일 : 2017. 08. 24

바. 준공기한   : 2018. 09. 30

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 12. 20

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 철도보호지구내 공사 협의 지연으로 인한 절대공기 부족

2018년 09월 19일

교량안전과장 김종호 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하