공사 준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 봉화황평분교가족자연체험시설소방공사

나. 도 급 자 : ㈜산업전기소방 대표 김진현

다. 도 급 액 : 금11,152,030원

라. 계약일자 : 2017. 10. 26

마. 착공일자 : 2017. 10. 30

바. 준공기한 : 2017. 12. 08

2. 공사 준공기한 연기

가. 공사 준공기한 연기

- 당 초 : 2017.10.26. ~ 2017.12.08.

- 변 경 : 2017.10.26. ~ 2017.12.21

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 선행공종인 건축공사 지연으로 인해 후속 공종인 본 공사 진행에 기간이 필요하여 준공기한 연장 필요

2017. 12.

확인자 : 시설과장  진병규 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소재무관 귀하