준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계 약 건 명 : 서울로7017 정밀안전진단 용역

나. 계 약 업 체 : ㈜한국시설안전연구원외 1개사

다. 계 약 금 액 : 금196,918,000원

라. 계약년월일 : 2018. 03. 26

마. 착수년월일 : 2018. 03. 27

바. 준 공 기 한 : 2019. 03. 21 (용역기간내 용역 중지 후 재개)

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한

- 당초 : 2019. 3.21  ⇒ 변경 : 2019. 7. 26

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 용역수행 중 시설물 하자가 조사되어 시공사에 하자보수 요청 후 하자보수기간 중 용역을 일시 중지하는 것으로 추진하였으며

- 하자보수 완료 및 용역재개(‘19.7.3)에 따라 용역중지기간을 반영하여 용역기간 연장이 필요함.

2019년 07월 12일

교량안전과장 김종호 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하