공사 준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서천군 장선초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)

나. 도 급 자 : 금산전업사 대표 김형태

다. 도 급 액 : 금51,585,450원

라. 계약일자 : 2016. 9. 26

마. 착공일자 : 2016. 9. 28

바. 준공기한 : 2016. 11. 26

2. 공사 준공기한 연기

가. 공사 준공기한 연기

- 당 초 : 2016.9.28. ~ 2016.11.16.

- 변 경 : 2016.9.28. ~ 2016.12.20

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 서천군에서 시행하고 있는 화장실 신축공사 선행공종 지연으로 인해 후속 공종인 본 공사 준공기한 연장 필요

2016. 11.

확인자 : 시설과장  진병규 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소재무관 귀하