준공기한 연기의뢰서

1. 용역계약 현황

가. 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역(1차)

나. 용 역 사 : ㈜신명건설기술공사

다. 용역현황

구 분	도 급 비(원)	착수년월일	준공기한	비고
전체	1,108,750,000	`13.04.01	`14.09.30
1차	628,000,000	`13.04.01	`13.03.11

2. 상기 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기현황

구 분	준공기한		비고
	당 초	변 경
1차	`14.03.11	`14.06.10	증)91일

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

○ 전면책임감리용역을 수행하고 있는 본 공사의 공정에 따른 감리원 배치  계획 조정에 의한 준공기한 연기

2014. 03.

작성자 : 지방시설주사보     이 병 환(인)

확인자 : 방재안전시설부장   박 종 웅(인)

서울특별시 경리관 귀하