준공기한 연기의뢰서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 노들섬 특화공원 조성공사 토목공사

나. 도 급 자 : 신성종합건설(주)

다. 공사현황

구 분	도 급 비(단위:원)	계약년원일	착공년월일	준공기한	비고
전체	6,099,000,000	‘17.11.13	‘17. 11.15	‘19. 4. 27

2. 상기 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다

가. 준공기한 연기현황

구 분	당 초	변 경	비 고
전체	‘19. 4. 27	‘19. 9. 30	156일

나. 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

다. 지체상금부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 국방부건물(군 방어시설) 철거 및 설치 지연에 따른 절대공기 부족

2019. 2.

작성자 : 지방시설주사     박상철 (인)

확인자 : 토목부장         김영수 (인)

도시기반시설본부 분임재무관 귀하