준공기한 연기 의뢰서

1. 공사개요

○ 용 역 명 : 2019 한강공원 야외 수영장 유지보수공사

건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2019.03.7 ~ 2019. 9.30

○ 계약업체 : 주식회사 대림환경

○ 계약금액 : 6,336,000원

2.  위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2019.03.7. ~ 2019.9.30.	2019.03.7. ~ 2019.10.31.

○ 연기 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부 과

○ 연기사유

- 수영장 운영기간중 목재데크 등 노후 손상된 시설물 및 태풍으로 인하여 파손된 시설물의 정비와 쾌적한 수영장 운영을 위한 식재등의 사항에 대하여 추가작업을 위하여 공사기간 필요

2019. 9.

공원시설과장    김 호 규 (인)

한강사업본부 경리관 귀하