준공기한 연기의뢰서

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 길음교 등 3개소 내진보강공사

나. 공사개요 : 교량받침 교체 42개소, 전단키 3개소

다. 공 사 비 : 금307,747,270원

라. 공사기간 : 2017. 11. 01. ~ 2017.12.31.

마. 계약상대자 : (주)유진아이엠씨 대표자 백영철

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분	준 공 기 한	비 고
당 초	2017. 11. 01. ~ 2017. 12. 31.
변 경	2017. 11. 01. ~ 2018. 04. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 절대공기 부족 및 동절기 공사 불가

2017. 12.

작성자 : 북부도로사업소 지방시설주사     오 광 준 (인)

확인자 : 북부도로사업소 시설보수과장     이 근 봉 (인)

서울특별시  재무관 귀하