준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

가. 용  역  명 : 동부간선도로 지하화 타당성 조사 및 기본계획

나. 계  약  자 : ㈜경동엔지니어링 외 2개사

다. 계 약 금 액 : 금475,900,000원(금사억칠천오백구십만원)

- 2차 : 금465,900,000원

라. 계약년월일 : 2015. 11. 25.(2차 : 2016. 1. 11.)

마. 착수년월일 : 2015. 11. 27.(2차 : 2016. 1. 13.)

바. 준공예정일 : 2018. 02. 28.(2차 : 2018. 02. 28.)

2. 요청내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

구 분	당 초	변 경
총 차	2018.02.28	2018.05.31
2 차	2018.02.28	2018.05.31

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 동부간선도로 지하화 민자사업 PIMAC 적격성 조사 결과와 연계하여 본 용역에서 세부 검토가 필요함에 따라 추가기간 소요

2018. 2.

도로계획과장 하 종 현 (인)

서울특별시 재무관 귀하