준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 :  중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(장기-2차)

나. 계약업체 : ㈜이산 외 2 (㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜동해종합기술공사)

다. 계약금액: 금380,300,000원(일금삼억팔천삼십만원정)

라. 계약년월일 : 2018. 1. 15.

마. 착수년월일 : 2018. 1. 15.

바. 준공기한 :  2018. 10. 31.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019. 1. 21.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

◦ 중랑 서남물재생센터 부지활용 기본계획 수립 용역과 연계 추진을 위한 용역기간 추가 필요

2018년 10월   일

물재생시설과  이 철 범(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하