준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모 지하안전영향평가 용역

나. 계약업체 : ㈜ 다산이엔지

다. 계약금액 : 일금 51,104,400원(금오천백십만사천사백원 부가세포함)

라. 계약년월일 : 2018.11.22.

마. 준공예정일 : 2019.12.31

2. 위 용역의 준공기한 및 계약금액 변경사항을 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 및 계약금액

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2019. 12. 31.	2020. 04. 30.	4개월 증가
금액변경(원)	￦ 51,104,400	￦ 137,324,400	86,220,000 증액

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(도로계획과)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 비개착구간 지하안전영향평가 수행으로 인해 용역기간이 절대적으로 부족하게 되어 과업비 증액 및 준공기한을 연기하고자 함.

2019년  11월  26일

담당자    직급 : 6급         성명 : 이일주   (서명 또는 인)

민자사업팀장   직급 : 5급         성명 : 조용상   (서명 또는 인)

도로계획과장   직급 : 4급         성명 : 안대희   (서명 또는 인)

서울특별시(분임)재무관 귀하