준공기한 연기 의뢰서

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 가양 나들목 개선공사

❍ 공사기간 : ‘18.04.16 ~‘19.03.31

❍ 계약업체 : 주식회사 대명이십일 김명회

❍ 도 급 액 : 848백만원

2.  위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2018.04.16. ~ 2019.03.31.	2018.04.16. ~ 2019.05.15.

○ 연기 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부 과

○ 연기사유

- 지장물(차집관거 부속 구조물) 저촉 및 주민 제안자 요청사항을 반영하여 지체요인 발생으로 준공기한 연장이 필요하며,

- 동절기 공사로 인한 콘크리트 품질저하를 예방하고자 작업시기 조정

2019. 3.

치수과장    손 창 열 (인)

한강사업본부 경리관 귀하