준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2016년 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성공사(문혜장애인요양원)

나. 도 급 자 : 씨아이조경(주) 대표 김향덕

다. 도 급 액 : 금60,513,040원

라. 계약일자 : 2016. 08. 22

마. 착수일자 : 2016. 08. 26

바. 준공기한 : 2016. 11. 08

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2016. 11. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 문혜요양원 측 추가시설 요청사항 검토와 현장 설계물량 증감 관련 설계변경에 따른 절대 공기부족

2016.  11.

확인자 : 녹지관리과장  김윤철  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 분임 재무관 귀하