준공기한 연기 의뢰서

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

나. 공사개요 : 철근콘크리트 통로암거 설치 25.86m, 보도포장 5a,

엘리베이트 덕트설치 13.45m, 하수관이설 105m

아스팔트포장 31.4a, 지하보도 표면보수 810㎡ 등

다. 공 사 비 : 금 747,258,700원

라. 공사기간 :  2014. 11. 26 ~ 2015. 8. 31

라. 계약상대자 : 주식회사  고황  정삼술

2. 상기 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분	준 공 기 한	비 고
당 초	2014. 11. 26 ~ 2015. 8. 31
변 경	2014. 11. 26 ~ 2015. 9. 25

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

. 선행공정(엘리베이터설치) 연기에 따른 절대공기 부족

2015.  8.

작성자 : 북부도로사업소 지방시설주사   김 영 원 (인)

확인자 : 북부도로사업소 시설보수과장   정 재 현 (인)

서울특별시  재무관 귀하