준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공  사  명 : 2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사

나. 계  약  자 : ㈜디자인메소 대표 이무섭

다. 계 약 금 액 : 금688,892,260원(금육억팔천팔백팔십구만이천이백육십원)

라. 계약년월일 : 2015. 11. 27.

마. 착수년월일 : 2015. 12. 02.

바. 준공예정일 : 2016. 02. 29.

2. 요청내용

○ 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 : 당초)2016.02.29.→ 변경)2016.04.30. (61일 연장)

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 본 공사기간 중 동절기 굴착통제(2015.12.1.~2016.2.29.)로 인한 공사가 중지됨에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 준공기한 연기하고자 함

2016.  1.

버스정책과장  이 상 훈 (인)

서울특별시 경리관 귀하