준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서울쌍문초등학교 옥상녹화텃밭조성공사

나. 도 급 자 : 주식회사 평광건설(대표자 권정훈)

다. 도 급 액 : 금114,385,460원

라. 계약일자 : 2016. 10. 19

마. 착수일자 : 2016. 10. 25

바. 준공기한 : 2016. 12. 03

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2016. 12. 15

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 수요기관측 추가 시설 요청사항 검토 및 현장여건에 따른 물량 증감사항 등 설계변경 추진을 위한 절대 공기 부족

2016.  11.

확인자 : 녹지관리과장  김윤철  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 분임 재무관 귀하