준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2014년 예방사방사업(예장동,이화동)

나. 도 급 자 : 산오름(주) 대표 권민정

다. 도 급 액 : 금223,586,000원

라. 계약일자 : 2014.  3.  13

마. 착수일자 : 2014.  3.  17

바. 준공기한 : 2014.  5.  25

2. 위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 5. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 예방사방사업(예장동,이화동) 공사범위 확대 및 추가 안전조치 등 사업물량 증가로 인한 절대공기 부족

2014. 5. 20

확인자 : 시설과장  함석주  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소분임경리관 귀하