준공기한 연기의뢰서

1. 용역 현황

가. 용 역 명 : 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역

나. 용역개요 : 도로교(폭 6~28.6m, 연장 3,933m)

철도교(폭 19m, 연장 1,445m)

다. 용역기간 : 2013. 10. 4 ～ 2014. 7. 30

라. 용 역 비 : 금763,000,000원

마. 용 역 자 : 한국시설안전공단   대표 김 경 수

2. 상기 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분	준 공 기 한	비 고
당 초	2013.10. 4 ~ 2014. 7.30
변 경	2013.10. 4 ~ 2014. 9.28	증 60일

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 최근 세월호사건 등 잇따른 안전사고에 따른 현장검검결과 추가 현장   조사 및 검토 반영 등으로 과업수행기간 연장이 필요하여 준공기한 연기

2014. 7.

작성자 : 남부도로사업소 지방시설주사   임 동 운 (인)

확인자 : 남부도로사업소 교량보수과장   이 용 재 (인)

서울특별시 경리관 귀하