준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

나. 도 급 자 : (주)동양 대표 정성수

다. 도 급 액 : 금139,609,400원

라. 계약일자 : 2014.  8.  01.

마. 착공일자 : 2014.  8.  04.

바. 준공기한 : 2014. 10.  02.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 10. 17

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 공사기간 중 잦은 우천(8월중 19일)과 추석연휴 등으로 정상적인 공사일정에 차질이 발생하여 절대공기 부족

2014. 9. 23

확인자 : 시설과장  함석주  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소분임경리관 귀하