준공기한 연기의뢰서

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 직원관사아파트 리모델링공사

나. 도 급 자 : 영보토건(주) 대표 최영록

나. 도 급 액 : 일금 514,948,000원

다. 계약연월일 : 2014. 05. 26

라. 착공연월일 : 2014. 05. 29

마. 준 공 기 한 : 2014. 12. 31

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 준공기한 2014. 12. 31

나. 변경 준공기한 2015. 02. 28

다. 연기사유 귀책소재 : 난지물재생센터

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 연기사유 :

- 누수등으로 주거환경이 매우 열악하고 시급히 보수가 필요한 세대 발생