준공기한 연기조치 의뢰서

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역

나. 용역개요 : 지하차도 총연장 490m(BOX 190m, U-Type 300m)

다. 용역기간 : 2014.09.01 ~ 2014.12.31

라. 용 역 사 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규

마. 용 역 비 : 142,800,000원

2. 상기 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

용 역 명	용 역 기 간
	당 초	변 경
석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역	2014.09.01 ~ 2014.12.31	2014.09.01 ~ 2015.02.28

나. 연기에 따른 귀책소재 : 동부도로사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

- 정밀안전진단용역 시행중 동절기 시설물 손상상태 점검 및 유관기관 자료 검토와 진단용역 기술심의 소요기간에 따른 절대공기 부족

2014.  12.

김호규

작성자 : 지방시설주사       김호규 (인)

박용선

확인자 : 시설보수과장       박용선 (인)