준공기한 연기의뢰서

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 2014년 센터내 시설물유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 한북이앤씨(주)  대표 박희준

나. 도 급 액 : 금334,724,000원

다. 계약연월일 : 2014. 03. 18

라. 착공연월일 : 2014. 03. 21

마. 준 공 기 한 : 2014. 12. 31

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 준공기한 2014. 12. 31

나. 변경 준공기한 2015. 02. 28

다. 연기사유 귀책소재 : 난지물재생센터

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 연기사유 :

- 센터 외곽산책로 정비계획 변경 시행에 따른 공사기간 연기.  끝.