준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역

나. 도 급 자 : ㈜피엠디조경기술사사무소 대표 이상종

다. 도 급 액 : 금15,068,090원

라. 계약일자 : 2015.  1.  30

마. 착수일자 : 2015.  2.   2

바. 준공기한 : 2014.  4.   2

2. 위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2015. 5. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 간데메공원 주민설명회에서 제기된 운동시설 정비 민원관련 추가 검토 및 협의시간이 필요하여 연기

2015. 3. 25

확인자 : 시설과장  이종한  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 분임재무관 귀하