준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 도로와 다른 도로 등과의 연결기준에 관한 연구

나. 계 약 자 : (재)서울연구원  대표 김수현

다. 계약금액 : 금117,640,000원(금일억일천칠백육십사만원)

라. 계약년월일 : 2015. 3. 17.

마. 착수년월일 : 2015. 3. 18.

바. 준공예정일 : 2015. 10. 12.

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여
주시기 바랍니다.

가. 준공기한

- 당  초 : 2015년 10월 12일

- 변  경 : 2015년 12월 11일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 도로 연결기준에 대한 관계기관(자치구 등) 협의 및 의견수렴 기간이 추가 필요함에 따라 과업기간 연장

2015.  10.

도로계획과장  최동필 (인)

서울특별시경리관 귀하