준공기한 연기 의뢰서

□ 용역 현황

○ 용 역 명 : 서울특별시 지하수관리계획 수립 용역

○ 계 약 자 : 한국지질자원연구원 컨소시엄

(한국지질자원연구원, 지오그린21, 한국환경정책평가연구원)

○ 계약기간 : ‘13. 5. 27.~ ’15. 6. 30.

(1차 : ‘13.5.27~ ‘14.3.26, 2차 : ‘14.3.27~ ‘15.6.30)

○ 계약금액 : 764,068,010원

(1차 : 339,338,940원,  2차 : 424,729,070원)

○ 주요과업

- 서울시 지하수 관리 비전 및 목표 설정

- 서울시 지하수 부존특성 및 개발가능량 조사․분석

- 서울시 지하수 보전․관리 및 개발․이용계획 수립

- 서울시 지하수 특성에 적합한 지하수 관리

- 지하수 관련 지하굴착 기준 수립 등

□ 용역 준공기한 연기 현황

○ 준공기한 연기 (총차, 2차)

구 분	당 초	변 경
총차 용역	‘13.5.27 ~ ’15.6.30	‘13.5.27 ~ ’15.9.30
2차 용역	‘14.3.27 ~ ‘15.6.30	‘14.3.27 ~ ‘15.9.30

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 도로함몰 우려 등으로 사회적 관심이 집중된 지하수 관리에 대한 신뢰도 높은 용역결과 도출을 위하여 ‘이스라엘, 일본, 독일 등 수자원 선진국의 사례와 계획에 대한 추가 조사 및 번역·분석’(시장요청사항, ‘15.3.12) 에 따른 용역기간이 추가로 소요되며,

- 현재 마무리 단계에 있는 서울지하철 계측관리요령 등의 관련내용 반영에 필요한 소요기간이 절대적으로 부족하여 준공기한을 연기 하고자 함

2015. 6.

물관리정책과장  배 광 환 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하