준공기한 연기의뢰서

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 2016년 농축조 보수공사

나. 도 급 자 : 진두건설(주)  대표 김용호

나. 도 급 액 : 금205,810천원

다. 착공연월일 : 2016. 04. 01

마. 준 공 기 한 : 2016. 07. 29

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 준공기한 : 2016. 07. 29

나. 변경 준공기한 : 2016. 10. 31

다. 연기사유 귀책소재 : 난지물재생센터

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 연기사유 :

- 수배전반 교체 공사 시행으로 인한 절대공기 부족.  끝.