공사 준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사

나. 도 급 자 : ㈜케이디파워 대표 김임배

다. 도 급 액 : 금10,480,000원

라. 계약일자 : 2016. 9. 9

마. 착공일자 : 2016. 9. 9

바. 준공기한 : 2016. 9. 30

2. 공사 준공기한 연기

가. 공사 준공기한 연기

- 당 초 : 2016.9.9. ~ 2016.9.30.

- 변 경 : 2016.9.9. ~ 2016.10.14

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 현재까지 개포디지털혁신파크 관리팀 책상배치가 미확정되어

- 책상배치에 따라 후속공정인 현황판 설치와 전기배관 경로가 변경이 요구되므로 준공기한 연장이 필요함

2016. 9.

확인자 : 시설과장  진병규 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소재무관 귀하